호국 문화복지 복합리조트 타운 조성

관리번호 2 - 16		중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			119.3	50	20	49.3	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(문화관광과)		공약담당	관광정책팀장 배경조(☎730-6396) 담 당 자 차지현(☎730-6195)

□ 현황 및 정책목표

현 황	초고령화 사회 진입에 따른 고령화친화산업 육성 필요
정책목표	호국 문화복지 복합리조트 타운 조성으로 문화, 복지와 힐링이 공존하는 호국 정신 기념 관광휴양지 조성

□ 사업개요 및 추진계획

사업개요

❍ 호국 문화복지 복합리조트 타운 조성

∙ 행안부「지방소멸대응기금사업」, 문체부「의료 및 웰니스관광 육성사업」, 산림청「산림복지서비스사업」,경북도「경북형 작은정원조성사업」, 기타 민자유치 등

→ 복지+문화+의료+실버타운+스포츠로 구성된 복합리조트 타운 조성

연 도 별

추진계획

~’22년	· 기본계획 및 타당성 조사 용역 · 행안부, 문체부, 산림청 등 중앙부처 공모사업 신청 · 민간투자 유치(익스트림 스포츠, 기업 연수원 등)
’23년
’24년	· 실시설계 용역 · 행정절차 이행(투자심사 등) · 사업착공 및 준공
’25년
’26년~

□ 연도별 재원계획

(단위 : 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	119.3	-	0.3	29	55	35
국비	50	-	-	10	20	20
도비	20	-	-	10	10	-
군비	49.3	-	0.3	9	25	15
기타	-	-	-	-	-	-

□ 세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
타당성 조사 용역	목표		100%	-	-	-
	실적
기본계획 수립	목표		100%
	실적
실시설계 용역	목표			70%	30%
	실적
행정절차 이행	목표		30%	40%	30%
	실적
공사 착공 및 준공	목표				30%	70%
	실적

□ 2022년까지 추진실적

❍ 타당성 조사 용역비 0.3억원(2023 본예산) 확보

기대효과	복합리조트 타운 조성을 통해 새로운 지역발전 성장동력 사업으로 재창출