기업유치를 위한 산업기반 확충

(경상북도 에너지산업융복합단지 조성)

관리번호 1 - 2		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			256.8	98.9	60.0	60.9	37.0
사업기간	2020. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	경상북도(에너지산업과)		공약담당	에너지산업팀장 장재경(☎730-6741) 담 당 자 박수예(☎730-6742)

현    황

신산업 육성을 통한 지역 경제활성화 및 일자리 창출 필요

정책목표

지역 풍력발전 연관산업 육성 및 지역경제 발전 도모

사업개요

❍ 에너지산업융복합단지 종합지원센터 건립(’21. ~ ’24., 190억원)

∙ 연면적 7,667㎡, 부지 13,967㎡, ‘24. 6. 준공예정

∙ 기업유치 지원, 융복합단지 운영, 기술 및 정책개발 등

❍ 노후 풍력발전단지 리파워링 R&D(’21. ~ ’24., 64억원)

∙ 리파워링 예정지 활용 산악지형 풍력단지 조성 기술개발

∙ 노후 풍력발전단지 대형화 및 사업화 기반마련

❍ 풍력에너지클러스터 인재양성(’21. ~ ’25.)

∙ 풍력연계산업(안전관리, 유지보수, 시험평가 등) 인재양성

∙ 현장 인력 및 글로벌 전문인력 양성

연 도 별

추진계획

~’22년	· 융복합단지 조성세부계획 수립용역 · 풍력연계산업 인재양성
’23년	· 융복합단지 종합지원센터 건립 추진 · 기업지원, 협력 네트워크 세부 추진계획 마련
’24년~	· 융복합단지 종합지원센터 건축공사 및 준공 (‘24. 6.) · 현장 인력양성 및 기업지원(실증, 기술개발)

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	256.8	189	67.8	-	-	-
국비	98.9	74.7	24.2	-	-	-
도비	60.0	44.2	15.8	-	-	-
군비	60.9	44.5	16.4	-	-	-
기타	37.0	25.6	11.4	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
종합지원센터 구축	목표	설계용역	착공	준공	-	-
	실적	완료	완료		-	-
노후풍력리파워링 R&D	목표	설계용역	배치최적화 설계	사업화 전략개발	-	-
	실적	완료	완료		-	-
풍력에너지 클러스터인재양성 사업	목표	교육과정 개선	전문인재 역량강화	전문인재 역량강화	전문인재 역량강화	-
	실적	완료	완료			-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (에너지산업 융복합단지 종합지원센터 건립) → 정상추진

∙ 종합지원센터 착공식 개최(’23. 7. 5.), 건립공사 정상추진중

❍ (노후 풍력발전단지 리파워링 R&D) → 정상추진

∙ 노후풍력 리파워링 단지개발 지역 거버넌스 구축 방안 수립

❍ (풍력에너지 클러스터 인재양성) → 정상추진

∙ 산학연 연계 맞춤형 전문인재 양성 지원

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ (에너지산업융복합단지 종합지원센터 건립)

∙ 종합지원센터 건립공사(’24. 6. 준공예정)

❍ (노후 풍력발전단지 리파워링 R&D)

∙ 리파워링 풍력발전단지 지역 이익공유방안 연구

❍ (풍력에너지클러스터 인재양성)

∙ 산학연 연계 맞춤형 전문인재 양성 지원

기대효과	우리지역의 신재생에너지 인프라를 통한 에너지 기업ㆍ관련기업 적극유치