오십천, 송천 친수공간 조성

관리번호 1-7		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			250	125	-	125	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진
사업주체	영덕군(건설과)		공약담당	하천팀장 박재홍(☎730-6525) 담당자 이재준(☎6526) 관광정책팀 배경조(☎730-6396) 담당자 오도일(☎6195) 조경휴양팀 박병덕(☎730-6745) 담당자 신민석(☎6747)

현    황

치수능력 위주의 하천공간 조성으로 활용미흡

정책목표

치수능력 향상을 기반으로 지역주민들의 삶의 질 향상이

연계된 복합하천 조성

사업개요

❍ 오십천, 송천 내 친수공간 조성

∙ 영덕군 영덕읍 오십천, 영해면 송천 일원

∙ 수변공원, 산책로, 체육시설 등 조성

연 도 별

추진계획

~‘23년	· 하천관리청(경북도) 협의 - 하천법에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사에 따른 협의
’24년	· 기본조사용역 ※하천친수계획 친수지구 안정성평가 검토 등 · 실시설계용역
’25년	· 사업착수
’26년~	· 사업준공

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	250	-	2	8	80	160
국비	125	-	1	4	40	80
도비	0	-	-	-	-	-
군비	125	-	1	4	40	80
기타	0	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
기본계획 수립 및 협의	목표	-	경북도 협의	-	-	-
	실적	-	협의 검토	-	-	-
실시설계 용역	목표	-	-	용역착수/준공	-	-
	실적	-	-	-	-	-
행정절차 이행 및 사업시행	목표	-	-	하천점용허가	사업착공	사업준공
	실적	-	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (오십천 친수공간 조성)

∙ 2022년 : 시설물 정비(볼라드 설치), 주민 보행통로 개설(L=300m), 오십천 하상주차장 조성

∙ 2023년 : 어린이 놀이시설 정비, 화개제 보행로 확대 조성 및 가로등 설치, 오십천 어린이 물놀이장 운영, 가로화단 조성(황금사철 4,000주 식재)

❍ (송천 친수공간 조성)

∙ 2022년 : 생활산책로 환경정비, 버드나무 식재

∙ 2023년 : 송천제방 가로경관 조성(1.7km/칠자화 287주) 산책로 환경 정비

향후계획(’24. 01. ~ )

❍ (친수공간 조성)

∙ 오십천 야외무대 설치 및 송천 버드나무 식재를 통해 지역 내 문화예술동아리 활동 장려, 문화 향유 기반 및 주민 친화 경관 조성

❍ (현안사항)

∙ 지방하천(오십천, 송천) 내 친수공간(체육시설, 공원 등) 조성 시 경북도 협의 필요

※ 「하천법」에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사에 따른 협의 필요 / 관리청: 경북도

∙ 최근 인근지역에서 하천 범람 등으로 인한 재해 발생으로 인해 하천 내 시설물 설치, 통수단면 과부족 등 홍수부담을 가중시키는 사업에 대해 중앙부처 등 하천관리청의 입장 부정적  ※ ’22년 태풍 “힌남노” 포항시 냉천 범람으로 인명 및 재산 피해 발생

❍ (대처방안)

∙ 안전 문제에 영향을 주지 않고, 주민의 이용편의와 여가 향유 증대 사업 중점 추진(산책로, 공원 등의 친수시설 확대 조성 및 시설물 정비, 조경 식재 등)

→ 사업규모 변경에 따른 확인지표 변경 필요, ‘24년도 주민배심원제 추진 시 변경 추진

기대효과	군민들의 하천 친수 이용성 증대 및 삶의 질 향상