경관택지 조성 기반 구축

현    황

열악한 주거환경(노후주택) 및 택지부족에 따른 쾌적한 주거환경에 대한 수요 증대

정책목표

도시지역 내 부족한 택지를 공급하고 자연경관이 양호한 지역에 전원주택단지를 조성

사업개요

❍ 기    간: ’22. 9. ~ ’26. 6.[5년간]

❍ 대 상 지: 영덕군 일원

❍ 사 업 비: 70억원(군비)

※ 실시설계 완료 후 총사업비 결정

연 도 별

추진계획

~’22년	· 경관택지 조성을 위한 타당성 검토 용역 발주
’23년	· 기본구상안 도출 및 타당성 검토 용역 완료 · 지방소멸대응기금 연계사업 선정
’24년	· 택지 조성 기본 및 실시설계 착수 · 지구단위계획·구역 결정 주민 의견 청취, 지형도면 고시 등 행정 절차 완료
’25년	· 기반시설 실시계획인가 및 사유지 매입 완료 · 공사 착공
’26년~	· 준공 및 분양추진

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	70	0.2	2	10	20	37.8
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	70	0.2	2	10	20	-
기타	-	-	-	-	-	37.8

관리번호 1-8		중앙정부 도움필요성: 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			70	-	-	70
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(도시디자인과)		공약담당	도시계획팀장 나명석(☎730-6336) 담 당 자 조지민(☎730-6466)

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
타당성조사 용역	목표	용역발주	용역완료	-	-	-
	실적	발주완료	용역완료	-	-	-
행정절차 이행 (주민의견청취 및 관련부서 협의)	목표	-	-	행정절차	-	-
	실적	-	-	-	-	-
기본 및 실시설계용역	목표	-	-	용역발주	-	-
	실적	-		-	-	-
사유지매입	목표	-	-	사유지매입	사유지매입	-
	실적	-	-	-	-	-
공사 발주(택지조성사업)	목표	-	-	-	공사발주	-
	실적	-	-	-	-	-
공사 완료(택지조성사업)	목표	-	-	-	-	공사완료
	실적	-	-	-	-	-
분양 추진	목표	-	-	-	-	분양추진
	실적	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (경관택지 조성계획 수립)

∙ 경관택지 조성을 위한 타당성 검토 용역 착수(’22. 9.)

∙ 경관택지 조성을 위한 타당성 검토 용역 준공(’23. 3.)

∙ 지방소멸대응기금 연계사업 선정(’23. 9.)

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ (추진방향)

∙ 도시지역: 민간 제안에 따른 지구단위계획구역 지정으로 주택공급

∙ 비도시지역: 지방소멸대응기금 연계사업으로 택지 개발 추진

❍ (경관택지 조성계획 수립)

∙ 택지조성 기본 및 실시설계 용역 시행(’24. 1월중)

∙ 지구단위계획·구역 결정 주민의견청취, 지형도면 고시 등 행정절차완료(’24. 12월중)

❍ (경관택지 조성사업 시행)

∙ 기반시설 실시계획인가 및 사유지 매입완료(’25. 1월중)

∙ 조성사업 공사 착공(’25. 1월중)

∙ 조성사업 공사 준공(’26. 6월중)

∙ 분양 추진(’26. 6월중)

기대효과	사업완료 시 부족한 택지공급 및 전원주택단지 조성에 따른 쾌적한 주거환경을 주민들에게 제공