무공해 캠핑·글램핑장 조성사업

관리번호 2-13		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			21	10.5	3.15	7.35	-
사업기간	2024. ~ 2025.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(산림과)		공약담당	조경휴양팀장 박병덕(☎730-6745) 담 당 자 김태형(☎730-6746)

현    황

산림의 다양한 공익적 기능을 연계한 웰니스 산림휴양문화 창출을 통하여 국민의 행복한 삶과 지역 관광활성화 기여

정책목표

지속가능한 산림경영을 도모하면서 숙박·편익시설 등 기본적인 휴양시설을 설치하여 국민의 휴양을 제공함과 동시에 지역경제 활성화

사업개요

❍ 위  치: 달산면 옥산리 산21번지 일원

❍ 사업비: 36억원

❍ 사업내용: 글램핑장(18동), 카라반(6동), 오토캠핑장, 전기시설 등

연 도 별

추진계획

~’22년	· 중기재정 투자심사 완료 · 균특 예산 신청
’23년	· 타당성 조사 및 기본계획 실시 · 각종 인허가 절차 수행
’24년	· 실시설계 용역 · 바데산 자연휴양림 조성사업과 연계한 캠핑·글램핑장 조성사업 착공
’25년	· 바데산 무공해 캠핑·글램핑장 조성사업 시공 및 운영

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	21	-	-	10	11	-
국비	10.5	-	-	5.0	5.5	-
도비	3.15	-	-	1.5	1.65	-
군비	7.35	-	-	3.5	3.85	-
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년
중기재정 투자심사 및 균특 예산 신청	목표	투자심사	균특예산 신청	-	-
	실적	완료	완료 및 확정	-	-
행정절차 이행	목표	-	행정절차 이행	-	-
	실적	-	이행중	-	-
실시설계 용역	목표	-	-	실시설계	-
	실적	-	-		-
공사 발주 및 준공	목표	-	-	-	공사 준공
	실적	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (바데산 자연휴양림 조성사업 준공)

∙ 바데산 자연휴양림 조성사업(건축,기반조성 등)

- 방문자 센터, 숲속도서관, 산림휴양관(6동)

❍ (사업 예산 확정)

∙ 경상북도 균특전환 사업 예산 신청(3. 15.)

∙ 사업 예산 확정(10. 05.)

❍ (사전 설계 실시)

∙ 바데산 자연휴양림 조경공사 사전설계 용역

∙ 글램핑장·카라반 선진지 견학 및 사전설계 검토

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ (실시설계용역)

∙ 조경공사 및 카라반·글램핑장 조성사업 실시설계용역

❍ ‘24. 6. 휴양림 운영 조례 제정

❍ (바데산 자연휴양림 개장전 임시운영)

∙ 기간제 근로자(2명) 유지관리

∙ 휴양림 관리 운영 방안 검토(위탁 운영 계획 수립)

❍ (공사착공 및 준공)

∙ ’24년 : 조경공사 착공 및 준공,카라반 및 글램핑장 제작 및 완료

∙ ’25년 : 오토캠핑장 조성 및 전기·통신시설 설치

기대효과	산림자원의 숙박시설,편익시설 등 휴양시설을 설치하여 국민의 보건휴양,정서함양,산림교육 등을 위한 야외휴양공간을 제공함과 동시에 지역경제 활성화