블루로드 구간별 테마로드 조성

관리번호 2-14		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			93	-	20	23	50
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(문화관광과)		공약담당	블루로드팀장 김재필(☎730-6347) 담 당 자 강병우(☎730-6348)

현    황

전국적 명성을 지닌 블루로드 구간내 새로운 관광자원 발굴로 신규 관광수요와 STAY영덕 관광활성화 계기 필요

정책목표

고속도로, 철도 개통에 따른 특색있는 테마공간 조성으로 블루로드 구간 내 신규 관광자원 발굴

사업개요

❍ (테마로드 조성) 황톳길, 몽돌길, 군영길, 가족산책길 등

❍ (단절구간 조성) 블루로드 D코스(부경~장사리) L=1.0km

❍ (미개설구간 조성) 블루로드 C코스(병곡~금곡리) L=4.9km

연 도 별

추진계획

~’22년	· 현장 조사 및 사업계획 구상
’23년	· 투･융자심사, 각종 인･허가 및 예산 확보 협의 · 기본계획 및 실시설계용역 시행 · 블루로드 황톳길 준공, 몽돌길 조성사업 착공(시행중)
’24년	· 구간별 사업 단계별 착공
’25년	· 사업 추진
’26년~	· 준공

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	93	-	13	30	30	20
도비	20	-	5	5	5	5
군비	23	-	8	5	5	5
기타	50	-	-	20	20	10

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
실시설계 용역	목표	-	설계용역 추진	-	-	-
	실적	-	80%	-	-	-
행정절차 이행	목표	-	60%	40%	-	-
	실적	-	60%		-	-
공사 발주 등	목표	-	20%	30%	30%	20%
	실적	-	20%

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (기본 및 실시설계 용역) → 정상추진

∙ 1·2차 현장조사, 착수보고회 개최

∙ 노선변경 등에 관한 50사단 작전성 검토결과 회신

∙ 기본계획 협의 및 작성 중(테마로드, 안내시설, 초소활용 계획, 순환노선 등 검토)

∙ 실시설계 신규노선(병곡~금곡리) 측량 완료

∙ 기본계획 협의 및 작성 중(테마로드, 안내시설, 초소 활용계획, 순환노선 등)

❍ (테마로드 조성 관련 공사 발주)  → 정상추진 *우선 시공구간 추진, 설계완료 후 단계별 발주

∙ B코스(석리) 몽돌자갈길 조성 L=1㎞ 중 0.5㎞ *몽돌 50㎥ 채집완료

∙ 쉼터 산림욕장 조성(A코스 1개소, B코스 2개소)

∙ B코스(석리) 황톳길 조성 L=1㎞

∙ 노후 군초소·진지 철거(B코스 3개소)

❍ (유지보수 관련 공사 발주)  → 정상추진

∙ 보행위험구간(창포, 축산, 관어대) 인공석 조성

∙ 블루로드 노후 위험시설물 안전점검 및 정비(데크, 난간, 사면 등 36개소)

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ (기본 및 실시설계 용역) 기본 및 실시설계 완료(’24. 2. 중)

❍ (테마로드 조성)

∙ 석리 양어장 군초소 리모델링 1개소 및 몽돌길 조성 L=1.0km(기 개설 L=0.5km)(’23. 11. ~ ’24. 3.)

∙ 부경·대탄항, 창포(트레킹센터) 벽화테마로드 조성 L=0.3km(’24. 1. ~ 5.)

∙ B코스 군초소(17개소) 스토리텔링 및 리모델링(협상에 의한 계약)(’24. 2. ~ 6.)

∙ 단계별 공사 발주(’24. 1. ~ ’26. 12.)

❍ (유지보수) 블루로드 노후 위험시설물(데크구조물, 난간, 사면 등) 상시 정비

기대효과	특색있는 구간별 테마로드를 조성하여 영덕 관광활성화 및 관광객 유치