어촌·어항 활력사업

관리번호 3-27		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후			450	255	58.4	136.6	-
사업기간	2023. ~ 2027.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(해양수산과)		공약담당	어촌신활력팀장 박중현(☎730-6577) 담 당 자 송승욱(☎730-6578)

현    황

낮은 소득, 한정된 일자리, 생활서비스 접근성 부족등으로

열악한 어촌의 정주여건으로 인한 인구유출 발생

정책목표

어촌마을의 새로운 경제생태계 구축을 통한 신규일자리 창출 및 어촌 생활서비스 개선을 통한 관계인구 유입

사업개요

❍ 어촌신활력 증진사업

∙ 사업기간: ‘23년 ~ ’26년(4년간)

∙ 사 업 량: 어촌생활권 4개소

∙ 사업내용: 어촌 경제거점 조성 및 민간투자 활성화, 어촌 생활  여건 개선 및 일자리 창출, 어업 필수시설 및   생활안전시설 개선

연 도 별

추진계획

’22년	· 주민의견 수렴 및 공모신청 대상지 선정 · ‘23년 해양수산부 공모신청(3개소 신청 2개소 선정목표) - 유형①: 강구항 / 300억 - 유형③: 하저항, 경정2항 / 50억(개소당)
’23년	· ‘24년 해양수산부 공모신청(5개소 신청 2개소 선정목표) - 유형②: 창대항 / 100억 - 유형③: 경정2항, 대부항, 하저항, 금진항 / 50억(개소당)
’24년	· 공모선정에 따른 기본계획 및 실시설계 용역추진(‘23년 선정사업) · ‘25년 해양수산부 공모신청(4개소 신청 1개소 선정목표) - 유형③: 공모신청 대상지 4개소 / 50억(개소당)
’25년	· 공모선정에 따른 기본계획 및 실시설계 용역추진(‘24년 선정사업) · 각종 인허가 및 관계기관 협의 및 사업착공
’26년~	· 사업준공

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	500	-	30	180	170	120
국비	255	-	30	66	76.5	82.5
도비	58.4	-	9	16.2	17.5	15.7
군비	136.6	-	21	37.8	41	36.8
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
공모신청 대상지 선정 및 예비계획 수립	목표	23년도 사업 공모신청(3개소)	24년도 사업 공모신청(4개소)	-	-	-
	실적	강구항, 하저항, 경정2항 계획수립 및 공모신청	24년도 사업 공모신청(5개소)	-	-	-
사업선정	목표	-	1개소	2개소	-	-
	실적	-	1개소	-	-	-
사업공정률	목표	-	기본계획수착수	실시설계	착공	준공
	실적	-	기획계획착수

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ (강구항 어촌신활력 증진사업(유형①))  → 정상추진

∙ 해수부 공모 신청(‘22. 11월)

∙ 서면평가 및 현장평가 시행(‘22. 12월 ~ ‘23. 1월)

∙ 공모 선정(‘23. 1월)

∙ 기본계획 수립용역 착수(‘23. 8. 21)

❍ (어촌신활력 증진사업(유형②))  → 정상추진

∙ 앵커조직 평가심의 및 선정(7. 31.)

∙ 창대항 어촌신활력증진사업 예비계획수립용역 실시(8. 14. ~ 10. 12.)

∙ '24년 창대항 어촌신활력증진사업 공모신청(10. 12)

❍ (어촌신활력 증진사업(유형③))  → 정상추진

∙ 예비계획수립용역 실시(7. 10. ~ 9. 7. / 4개소)

∙ '24년 어촌신활력증진사업 공모신청(9. 7. / 경정2항, 대부항, 하저항, 금진항)

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ (강구항 어촌신활력 증진사업(유형①))

∙ 기본계획 수립용역 준공(‘24. 6월)

∙ 실시계획 및 사업 착준공(‘24. 7월 ~ ‘26. 12월)

❍ (어촌신활력 증진사업(유형②, 유형③)

∙ 서면 및 현장평가(‘23. 10. ~ 12.)

∙ 공모선정 대상지 발표(‘24. 1월중)

기대효과	낙후된 어촌 정주여건 및 생활서비스 개선을 통한 일자리창출 및 인구유입