어르신 복지시설 및 서비스확대(노인복지관 건립)

관리번호4-31		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			100	-	-	55	45
사업기간	2023. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(가족지원과)		공약담당	노인복지팀장 박신자(☎730-6214) 담 당 자 오윤탁(☎730-6216)

현    황

경북도내 노인복지관 미소유 3개시군(영덕, 고령, 성주)

정책목표

체계적인 노인복지서비스로 수준 높은 노후생활 영위

사업개요

❍ 사업명 : 노인복지관 건립(세대이음 공간 조성)

❍ 내  용

∙ 기  간 : 2023~26년(3년간)

∙ 규  모 : 연면적 1700㎡(515평)

∙ 위  치 : 영덕읍 남석리 34-80번지 일원

∙ 사업비 : 100억(군55, 기금45)

∙ 내  용 : 강당, 프로그램실, 물리치료실, 장난감도서관 등

세대간 화합의 공간 마련

연 도 별

추진계획

’22년	· 타당성 조사 및 기본계획 수립
’23년	· 지방소멸대응기금 투자계획서 제출 및 대면평가
’24년	· 예산확보 및 실시설계
’25년	· 공사 착공
’26년~	· 공사 준공 및 운영

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	100	-	-	5	50	45
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	55	-	-	-	30	25
기타	45	-	-	5	20	20

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	목표	용역 발주	용역 준공	-	-	-
	실적	발주 완료	발주 완료	-	-	-
공모사업 신청 및 선정	목표	-	공모 선정	-	-	-
	실적	-	선정	-	-	-
실시설계	목표	-	-	설계시행	-	-
	실적	-	-	-	-	-
사업발주	목표	-	-	-	착공	준공
	실적	-	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ 노인복지관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 발주(’22. 12.)

❍ (사업위치변경) 당초 영덕읍 우곡리 → 영덕읍 남석리 34-80번지 변경

∙ 사유: 부지민원 미해결 및 주차공간 협소

❍ 예산확보 위한 지방소멸대응기금 투자계획서 제출(’23. 4.)

❍ 2024년 지방소멸대응기금 투자사업대상 선정(‘23. 11. 8.)

향후계획(’24. 1. ~ )

❍ 지방재정 투자심사 신청(‘24.  3.)

❍ 설계(‘24.  4. ~ 11.)

❍ 공사착공(‘25.  2.)

❍ 공사준공(‘26.  6.)

기대효과	수준 높은 노후생활 영위, 주민소통공간으로서 친밀감 형성