영덕군 도시가스 미공급지역에 대한 추가 공급 확대

관리번호 4 - 34		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			162.8	-	17.3	64.1	81.4 (영남에너지)
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(일자리경제과)		공약담당	기업지원팀장 이신우(☎730-6241) 담 당 자 남윤빈(☎730-6243)

현    황

도시가스 공급권역(영덕읍·강구면·영해면) 내 도시가스 공급관 설치 지원

정책목표

도시가스 공급 확대 통한 지역주민의 연료비 부담 경감 및 에너지 복지 증진

사업개요

❍ 사업위치 : 도시가스 공급권역(영덕읍·강구면·영해면)

❍ 주요내용 : 도시가스 미공급지역 공급관 설치 지원

❍ 공급업체 : ㈜영남에너지서비스

연 도 별

추진계획

’22년	· 공급관 2km, 200세대 공급
’23년	· 공급관 2km, 200세대 공급 · 본관 12.4km, 공급관 32.8km, 3,811세대 공급 완료(‘14~‘23년)
’24년	· 공급관 2km, 200세대 공급
’25년	· 공급관 2km, 200세대 공급
’26년	· 공급관 2km, 200세대 공급

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	162.8	122.8	10	10	10	10
국비	-	-	-	-	-	-
도비	17.3	12.5	1.2	1.2	1.2	1.2
군비	64.1	48.9	3.8	3.8	3.8	3.8
기타	81.4	61.4	5	5	5	5

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
공급관 설치	목표	2km	2km	2km	2km	2km
	실적	2.8km	2.6km
공급 세대	목표	200세대	200세대	200세대	200세대	200세대
	실적	280세대	216세대

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’23. 12.)

❍ ‘22.  5. ~  8.: ’22년도 공급관 지원사업 추진

∙ 공급관 2.5km / 250세대

❍ ‘22.  7. ~ 11.: ’23년도 공급관 지원사업 수요조사 및 구간검토

❍ ‘22.  9. ~ 11.: ’22년도 공급관 지원사업(추가분) 추진

∙ 공급관 0.3km / 30세대

❍ ‘22. 12.: 「영덕군 도시가스 미공급지역 지원에 관한 조례」 일부 개정

∙ ’23년 신규 자체사업 「도시가스 공급관 설치 보조금 지원사업」 추진근거 마련

❍ ’23.  2.: ‘23년도 도시가스 미공급지역 지원사업 업무협약 체결

❍ ‘23.  3. ~  8.: ’23년도 공급관 지원사업 추진

∙ 공급관 2.4km / 203세대

❍ ‘23.  7. ~ 11.: ’24년도 공급관 지원사업 수요조사 및 구간검토

❍ ‘23. 11. ~ 12.: ’23년도 공급관 지원사업(추가분) 추진

∙ 공급관 0.2km / 13세대

향후계획(’24. 1.. ~ )

❍ ‘24. 2.: ’24년도 공급관 지원사업 구간 확정

❍ ‘24. 3.: ’24년도 도시가스 미공급지역 지원사업 업무협약 체결

※ 군 자체사업 「도시가스 공급관 설치 보조금 지원사업」 추가 시행으로 개별 설치 희망 가구의 주민부담(수요가부담 시설분담금) 경감 등 공급망 확대를 위한 별도 추진

기대효과	도시가스 미공급지역의 공급 확대를 통한 지역주민 에너지 복지 증진